ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 	

1.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΕΣΠΑ 2014-2020	
2.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ):   5001985
	3.	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Διοικητικές αναδιαρθρώσεις, ψηφιοποίηση και παρεμβάσεις για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων της Γ.Γ. Πρόνοιας	
4.	ΑΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΠΣ): 	3
	5.	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης των ακινήτων της Γ.Γ. Πρόνοιας	
2.	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 1011404  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ 	

3.	ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΑΥΙΜ	4.	ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Κύριο Υποέργο
	
5.	ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ /ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Εκτέλεση Έργων με ίδια μέσα	
6.	ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ/ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Απόφαση Υλοποίησης με Ιδια Μέσα	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	
7.	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Αρχική	8.	Α.Α. ΤΔΥ: 1.0     (ID: 9066)	
9.	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ:  21/11/2017	
17.	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ/ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ: 01/05/2018	18.	ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 30/11/2018	
10.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 74.495,00 €	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	
22.	ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ  (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ή ΝΟΜΟΣ / ΟΤΑ) - (NUTS/LAU)
	I. ΚΩΔΙΚΟΣ	II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	III. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	
		ΣΥΝΟΛΟ	0,00	

ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ / ΩΝ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ / ΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ / ΦΟΡΕΩΝ	
1.	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ / ΦΟΡΕΑ
	2.	ΑΦΜ
	2.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
	3.	ΔΟΥ
	4.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΔΑΜ
	6.ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ
	5.	ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΑΝΑΔΟΧΟ / ΦΟΡΕΑ
	
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ	090028400	ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10       , ΑΘΗΝΑ	1159 - ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ		Βασικός-Κύριος Ανάδοχος	74.495,00	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	
6.	ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ	
9.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:	ΧΧΧΧ	
	ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:	Προϊστάμενος Τμήματος Ανάπτυξης Εφαρμογών ΧΧΧΧ	
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΧΧΧΧ	
	ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	ΧΧΧ	E-MAIL:	ΧΧΧ 	
7.	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ	
11.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:	ΧΧΧΧ	
	ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:	Προϊστάμενος Τμήματος Ανάπτυξης Εφαρμογών ΧΧΧΧ	
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΧΧΧΧ	
	ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	ΧΧΧ	ΧΧΧ	ΧΧΧ	

ΤΜΗΜΑ Γ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	
1.	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΣΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν στα εξής: 
ΠΕ 1 :Προδιαγραφές του Πληροφοριακού Συστήματος παρακολούθησης και Διαχείρισης ακινήτων
Περιλαμβάνει τις προδιαγραφές του Πληροφοριακού Συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ακινήτων τόσο όσον αφορά στο σχεδιασμό της βάσης (πίνακες δεδομένων, συσχετίσεις τους κλπ) όσο και της εφαρμογής (καταχώρηση όλων των δεδομένων, διαχείριση μισθωμάτων,   εωχωρικός εντοπισμός ακινήτου κλπ).
ΠΕ 2 : Ηλεκτρονικό Μητρώο ακινήτων και πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ακινήτων
Περιλαμβάνει την υλοποίηση μια διαδικτυακή εφαρμογή, για τη καταγραφή-αποτύπωση και διαχείριση των ακινήτων της Γ.Γ.Πρόνοιας και των εποπτευόμενων από αυτήν Φορέων της. Η εφαρμογή θα χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτήσει με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί (στοιχεία ακινήτων) και ότι έχει αποτυπωθεί σε εικόνες, τη βάση δεδομένων.  	
ΠΕ 3 :Εγχειρίδιο χρήσης και εκπαίδευση υπαλλήλων και χρηστών
Περιλαμβάνει το εγχειρίδιο χρήσης στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι λειτουργίες της εφαρμογής με υποδείγματα από φόρμες για την ορθή καταχώρηση και διαχείριση των στοιχείων. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο/χώρο που θα οριστεί από κοινού μεταξύ του Φορέα Λειτουργίας και του Δικαιούχου της Πράξης.	

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΑΣΕΩΝ / ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	
2.	Α/Α
	3.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗΣ
	2.	 ΦΑΣΗΣ
	3.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΑΣΗΣ	
1	ΠΕ 1: Προδιαγραφές του Πληροφοριακού Συστήματος παρακολούθησης και Διαχείρισης ακινήτων	01/05/2018	02/07/2018	
2	ΠΕ 2: Ηλεκτρονικό Μητρώο ακινήτων και πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ακινήτων 		02/07/2018	02/11/2018	
3	ΠΕ 3 :	Εγχειρίδιο χρήσης και εκπαίδευση υπαλλήλων και χρηστών	01/10/2018	30/11/2018	

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΦΑΣΕΙΣ / ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	
6.	Α/Α
	4.	 ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	8.	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
	9.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	10.	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	
1	ΠΕ 1: Προδιαγραφές του Πληροφοριακού Συστήματος παρακολούθησης και Διαχείρισης ακινήτων	Π3.1 :	Τεύχος προδιαγραφών πληροφοριακών εφαρμογών , Ενέργειες: •	Προδιαγραφές/Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων (Β.Δ.).
•Προδιαγραφές/Σχεδιασμός Εφαρμογών
•Προδιαγραφές Πιστοποίησης Χρηστών.
•Τεχνικές προδιαγραφές και εργαλεία υλοποίησης των εφαρμογών.
•Προδιαγραφές λειτουργίας.	8.255,00	7.587,26	
2	ΠΕ 2: Ηλεκτρονικό Μητρώο ακινήτων και πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ακινήτων 		Π3.2 :	Ηλεκτρονικό Μητρώο ακινήτων και πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ακινήτων. , Ενέργειες: •	Ανάλυση Απαιτήσεων
•Μελέτη απαιτούμενων υποδομών (Β.Δ., Επικοινωνία, Διαδικτυακή Υπηρεσία)
•Δημιουργία Β.Δ. και τροφοδότησή της με τα συγκεντρωθέντα στοιχεία
•Σχεδιασμός/Υλοποίηση Διαδικτυακής Υπηρεσίας (Web Service )
•Σχεδιασμός/Υλοποίηση Εφαρμογής 
•Συλλογή στοιχείων χρηστών και καταχώρησή τους στην Β.Δ. και Πιστοποίηση.
•Δοκιμαστική λειτουργία.
•Παραγωγική Λειτουργία.	57.240,00	51.898,06	
3	ΠΕ 3 :	Εγχειρίδιο χρήσης και εκπαίδευση υπαλλήλων και χρηστών	Π3.3α : Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής
Π3.3β : Εκπαίδευση υπαλλήλων και χρηστών το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
•Πλάνο Εκπαίδευσης με αναλυτική αναφορά στο χρόνο, τόπο και πλήθος εκπαιδευομένων
•Εκπαιδευτικό Υλικό
•Πιστοποίηση εκπαιδευτικού έργου που θα περιλαμβάνει:
παρουσιολόγια εκπαιδευτών / εκπαιδευομένων, έγγραφη αναφορά πιστοποίησης εκπαίδευσης, συγκεντρωτικά υπολογιστικά φύλλα των ωρών απασχόλησης κάθε εκπαιδευτή, βάσει των οποίων προέκυψαν οι μισθολογικές καταστάσεις
•Αναφορά αξιολόγησης αποτελεσμάτων εκπαίδευσης
 , Ενέργειες: •	Τεκμηρίωση/Εγχειρίδιο Χρήσης
•Κατάρτιση πλάνου εκπαίδευσης με αναλυτική περιγραφή 
•Ορισμός υπαλλήλων - χρηστών που θα παρακολουθήσουν την εκπαίδευση
•Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού
•Διενέργεια εκπαίδευσης χρηστών
•Αξιολόγηση Εκπαίδευσης και Εκπαιδευομένων	9.000,00	8.109,68	
ΣΥΝΟΛΑ:	74.495,00	67.595,00	

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	
11.	ΕΤΟΣ	12.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	5.	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	
2018	74.495,00	67.595,00	
ΣΥΝΟΛΟ	74.495,00	67.595,00	

ΤΜΗΜΑ Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ	
	
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	
1.	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
		2.ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	3.ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	4.ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	5.ΣΧΟΛΙΑ
	
A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN						
i.	Α.1.1 Άμεσες δαπάνες προσωπικού 
	i.	Ποσό χωρίς ΦΠΑ	67.595,00 	67.595,00	0,00	ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΦΠΑ	
	ii.	ΦΠΑ	6.900,00 	0,00	6.900,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Α.1.1 έως Α.1.13)		74.495,00	67.595,00	6.900,00		
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ  - Σ1 (υποσύνολο αμέσων δαπανών  εξαιρούμενων των δαπανών Α.1.4, Α.1.5, Α.1.6)		74.495,00	67.595,00	6.900,00		
ΣΥΝΟΛΟ Α		74.495,00 	67.595,00	6.900,00		

1.	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
		2.ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	3.ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	4.ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	5.ΣΧΟΛΙΑ
	
B.ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ				
ΣΥΝΟΛΟ Β		0,00	0,00	0,00		
Γ.  ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	
		0,00 	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ) 		74.495,00	67.595,00	6.900,00		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ e-ΠΔΕ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	
Ενημέρωση Υποέργου στο e-ΠΔΕ 
κατά την οριστικοποίηση του δελτίου:	Οριστικοποίηση πριν την ενεργοποίηση της διασύνδεσης με e-ΠΔΕ	
	
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΔΥ *	
ΚΩΔ.MIS	ID ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΣΕ ΙΣΧΥ	ΣΥΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΕ ΜΗΝΕΣ	1η ΗΜΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ	ΕΞΑΙΡΕΣΗ στο e-ΠΔΕ 
ΑΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΟΕΡΓΩΝ	
5001985	16821	12.29	21/11/2017	174.760,93	ΟΧΙ	
	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ *	
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ Υ/Ε	ΑΑ
Υ/Ε	ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΕ ΜΗΝΕΣ	ΗΜΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΔΕ
(ΠΛΗΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)	
2020ΣΕ46310014	20087	3	12.29	21/11/2017	74.495,00	ΟΧΙ	
•	Τα ανωτέρω στοιχεία υπολογίζονται σύμφωνα με τα οριστικοποιημένα στοιχεία των ΤΔΥ κατά την εκτύπωση του δελτίου.	

Συνημμένα Αρχεία	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ	
Αποφάσεις εκτέλεσης με ίδια μέσα	GGPRONOIAS-5001985-AKINITA-DIAVIV.EGKEKR.SCH.AYTEPIST SE DA_8796-10-11-17.pdf 		
Λοιπά έγγραφα	OIP54691V5-EOD 1.pdf 	Έγκριση κατάθεσης της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα	
Αποφάσεις εκτέλεσης με ίδια μέσα	AYTEPISTASIA TELIKI ME PROTOKOLLO KAI ADA.pdf